Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 06.12.2021 N 2777
(ред. от 21.10.2022)
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие инфраструктуры города Сочи"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 09.12.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2021 г. N 2777

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СОЧИ"

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
от 28.12.2021 N 3273, от 02.03.2022 N 490, от 29.04.2022 N 1230,
от 02.06.2022 N 1635, от 12.07.2022 N 2119, от 28.07.2022 N 2437,
от 04.10.2022 N 3334, от 21.10.2022 N 3576)		

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 17 июня 2021 года N 1155 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края", Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 7 июля 2021 года N 1355 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края", на основании Устава муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие инфраструктуры города Сочи" (прилагается).
2. Управлению информации и аналитической работы администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (Мруг) опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (Лавриенко) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края Цицкиева Ю.И.
(п. 4 в ред. Постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 12.07.2022 N 2119)
5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава города Сочи
А.С.КОПАЙГОРОДСКИЙ

Приложение

Утверждена
Постановлением
администрации муниципального
образования городской округ
город-курорт Сочи
Краснодарского края
от 06.12.2021 N 2777

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СОЧИ"

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
от 28.12.2021 N 3273, от 02.03.2022 N 490, от 29.04.2022 N 1230,
от 02.06.2022 N 1635, от 12.07.2022 N 2119, от 28.07.2022 N 2437,
от 04.10.2022 N 3334)		

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"
(далее - муниципальная программа)
(в ред. Постановления администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)

Координатор муниципальной программы	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Координаторы подпрограмм	департамент реализации проектов комплексного развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Участники муниципальной программы	департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
администрация Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Подпрограммы муниципальной программы	подпрограмма "Комплексное развитие муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, реализуемое в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 года N 3143-р"
подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоотведения города Сочи"	
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены	
Цель муниципальной программы	повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры	
Задачи муниципальной программы	обеспечение водоснабжением и водоотведением населенных пунктов на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
обеспечение газоснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
обеспечение электроснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
строительство и реконструкция дорог общего пользования
финансирование расходов по содержанию муниципальных казенных учреждений и обеспечению деятельности органов местного самоуправления
поддержание эксплуатационных показателей объектов капитального строительства на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
проведение комплекса мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения и социально значимых объектов
повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края объектами коммунальной инфраструктуры и обеспечение защищенности от негативного воздействия вод пляжных территорий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечивающие экологически благоприятные условия жизни населения
снижение риска возникновения оползневых процессов
проведение комплексных мероприятий в целях обеспечения рационального и эффективного землепользования на территории города Сочи
строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Перечень целевых показателей муниципальной программы	количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
количество положительных заключений государственной экспертизы
количество капитально отремонтированных объектов
количество обследованных существующих и возведение новых подпорных сооружений
количество объектов подлежащих сносу, обеспеченных проектной документацией
количество разрабатываемых комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий
количество разработанной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы
количество строящихся и реконструируемых объектов водоотведения
количество строящихся и реконструируемых канализационных напорных коллекторов
количество построенных и реконструированных объектов водоотведения
количество построенных и реконструированных канализационных напорных коллекторов	
Проекты и (или) программы	не предусмотрены	
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2025 годы, этапы не предусмотрены	
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей	всего	в разрезе источников финансирования	
Годы реализации		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники	
2022 год	1608430,4	0,0	1371069,0	237361,4	0,0	
2022 <*> год	5887,7	0,0	2167,8	3719,9	0,0	
2023 год	17405893,9	0,0	16478990,6	926903,3	0,0	
2024 год	9526993,9	0,0	9234391,2	292602,1	0,0	
2025 год	8288822,0	0,0	7999935,4	288886,6	0,0	
Всего <*>	5887,7	0,0	2167,8	3719,9	0,0	
Всего	36830139,6	0,0	35084386,2	1745753,4	0,0	
расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	
2022 год	1434327,7	0,0	1371069,0	63258,7	0,0	
2022 <*> год	3618,1	0,0	2167,8	1450,3	0,0	
2023 год	17068843,1	0,0	16478990,6	589852,5	0,0	
2024 год	9453801,6	0,0	9234391,2	219410,4	0,0	
2025 год	8070651,4	0,0	7999935,4	70716,0	0,0	
Всего <*>	3618,1	0,0	2167,8	1450,3	0,0	
Всего	36027623,8	0,0	35084386,2	943237,6	0,0	

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации согласно приложению 1 к муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к муниципальной программе. Подпрограмма "Комплексное развитие муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, реализуемое в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 года N 3143-р" представлена в приложении 25 к муниципальной программе. Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоотведения города Сочи" представлена в приложении 45 к муниципальной программе.
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 02.03.2022 N 490, от 21.10.2022 N 3576)

3. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Налоговые расходы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 17 июня 2021 года N 1155 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края".

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ
(в ред. Постановления администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края от 02.03.2022 N 490)

5.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор - департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в Государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
размещает изменения, внесенные в муниципальную программу в Государственной автоматизированной информационной системе "Управление";
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
5.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - департамент реализации проектов комплексного развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, который:
обеспечивает разработку, реализацию, координацию деятельности участников подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;
организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;
осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы в целом;
осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).
5.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).
План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее - контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.
Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются. Для основных мероприятий:
направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);
предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля, следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных мероприятий.
В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
5.4. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.
5.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.
5.6. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и обеспечивает его размещение в подразделе "Муниципальные программы" раздела "Деятельность" во вкладке "Городская власть" официального сайта администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).
5.7. Координатор муниципальной программы:
- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;
- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы, информацию, необходимую для формирования отчетных форм мониторинга реализации муниципальной программы и годового доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Годовой доклад включает отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы и текстовую часть;
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы и (или) мероприятиях подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме (нереализации);
результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов бюджета города Сочи на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.
Отдельно отражается информация об использовании в годовом докладе прогнозных значений целевых показателей муниципальной программы, по которым к сроку представления годового доклада невозможно представить фактические значения.
Если после направления в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края годового доклада появляются точные данные о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, в том числе данные, содержащиеся в данных государственного статистического наблюдения, координатор представляет соответствующие уточненные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
5.8. При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком мероприятия и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), участника муниципальной программы).
5.9. Муниципальный заказчик мероприятия:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы, координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи.
5.10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.11. Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия (основного мероприятия);
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
5.11. Контроль за расходованием средств осуществляется соответствующими главными распорядителями средств бюджета города Сочи, а также органами финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СОЧИ"

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
от 28.07.2022 N 2437, от 04.10.2022 N 3334, от 21.10.2022 N 3576)		

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус <1>	Значение целевого показателя	
				2020 год <2>	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, из них	единиц	3	-	2	1	3	-	
1.1.1	здравоохранения	единиц	3	-	1	1	1	-	
1.1.2	газоснабжения	единиц	3	-	1	-	2	-	
1.2	Количество положительных заключений государственной экспертизы, из них	единиц	3	6	3	9	1	-	
1.2.1	объектов водоснабжения и водоотведения	единиц	3	-	1	-	1	-	
1.2.2	объектов газоснабжения	единиц	3	1	1	5	-	-	
1.2.3	объектов здравоохранения	единиц	3	3	1	1	-	-	
1.2.4	объектов дорожного хозяйства	единиц	3	2	-	1	-	-	
1.2.5	Объектов инженерной инфраструктуры (мосты)	единиц	3	-	-	2	-	-	
1.3	Количество капитально отремонтированных объектов	единиц	3	2	5	-	-	-	
(п. 1.3 в ред. Постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.4	Количество обследованных существующих и возведение новых подпорных сооружений	единиц	3	-	40	-	-	-	
		Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334 в п. 1.5 внесены изменения.		
	
1.5	Количество объектов, подлежащих сносу, обеспеченных проектной документацией	единиц	3	-	2	-	-	-	
2.1. Подпрограмма "Комплексное развитие муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, реализуемое в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 года N 3143-р"	
2.1.1	Количество положительных заключений государственной экспертизы, из них	единиц	3	-	-	12	-	-	
2.1.1.1	Объектов водоснабжения и водоотведения	единиц	3	-	-	7	-	-	
2.1.1.2	Магистральных канализационных коллекторов	единиц	3	-	-	1	-	-	
2.1.1.3	Объектов берегоукрепления и гидротехнических сооружений	единиц	3	-	-	4	-	-	
2.2.1	Количество построенных объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	единиц	3	-	-	-	-	-	
2.2.1.1	Объектов водоснабжения и водоотведения	единиц	3	-	-	-	-	-	
2.2.1.2	Магистральных канализационных коллекторов	единиц	3	-	-	-	-	-	
2.2.1.3	Объектов берегоукрепления и гидротехнических сооружений	единиц	3	-	-	-	-	-	
3.1. Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоотведения города Сочи"	
(п. 3.1 введен Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
3.1.1.	Количество разрабатываемых комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий	единиц	3	-	5	-	-	-	
(п. 3.1.1 введен Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
3.1.2.	Количество разработанной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы	единиц	3	-	-	5	-	-	
(п. 3.1.2 введен Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
3.1.3.	Количество строящихся и реконструируемых объектов водоотведения	единиц	3	-	-	5	5	5	
(п. 3.1.3 введен Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
3.1.4.	Количество строящихся и реконструируемых канализационных напорных коллекторов	единиц	3	-	-	5	5	5	
(п. 3.1.4 введен Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
3.1.5.	Количество построенных и реконструированных объектов водоотведения	единиц	3	-	-	-	-	5	
(п. 3.1.5 введен Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
3.1.6.	Количество построенных и реконструированных канализационных напорных коллекторов	единиц	3	-	-	-	-	5	
(п. 3.1.6 введен Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	

--------------------------------
<1> Отмечается:
"1" целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения;
"2" целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, органа исполнительной власти Краснодарского края, администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края;
"3" целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы.
<2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы.

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СОЧИ"

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
от 28.12.2021 N 3273, от 02.03.2022 N 490, от 29.04.2022 N 1230,
от 02.06.2022 N 1635, от 28.07.2022 N 2437, от 21.10.2022 N 3576)		

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица изменения	Тенденция развития целевого показателя	Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле	Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя	Временные характеристики целевого показателя <1>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Целевые показатели муниципальной программы	
1.1	Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, из них	Единиц	Снижение значений	суммарное значение объектов, введенных в эксплуатацию в течение соответствующего года
суммарное значение введенных в эксплуатацию в течение соответствующего года	показатель формируется на основании полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" разрешений на ввод в эксплуатацию объектов муниципальной собственности	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
1.1.1	здравоохранения	единиц	увеличение значений					
1.1.2	газоснабжения	единиц	увеличение значений					
(п. 1.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 02.06.2022 N 1635)	
1.2.	Количество положительных заключений государственной экспертизы, из них	единиц	увеличение значений	суммарное значение проектируемых объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании копий положительных экспертиз, полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" показатель формируется на основании копий положительных экспертиз, полученных МКУ города Сочи "Управление автомобильных дорог"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
1.2.1	объектов водоснабжения и водоотведения	единиц	увеличение значений					
1.2.2	объектов газоснабжения	единиц	увеличение значений					
1.2.3	объектов здравоохранения	единиц	снижение значений					
1.2.4	объектов дорожного хозяйства	единиц	увеличение значений					
1.2.5	объектов инженерной инфраструктуры (мосты)	единиц	увеличение значений					
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)	
1.3	Количество капитально отремонтированных объектов	единиц	снижение значений	суммарное значение капитально отремонтированных объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" актов выполненных работ	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
1.4	Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.12.2021 N 3273	
1.4	Количество обследованных существующих и возведение новых подпорных сооружений	единиц	увеличение значений	суммарное значение обследованных объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании актов выполненных работ, полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
(п. 1.4 введен Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 29.04.2022 N 1230)	
1.5	Количество объектов подлежащих сносу, обеспеченных проектной документацией	единиц	увеличение значений	суммарное значение самовольно возведенных объектов подлежащих сносу, обеспеченных проектной документацией в течение соответствующего года	показатель формируется на основании копий положительных экспертиз, полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
(п. 1.5 введен Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 29.04.2022 N 1230)	
2.1. Подпрограмма "Комплексное развитие муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, реализуемое в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 года N 3143-р"	
(введен Постановлением администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 02.03.2022 N 490)	
2.1.1	Количество положительных заключений государственной экспертизы, из них	единиц	увеличение значений	суммарное значение проектируемых объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании копий положительных экспертиз полученных МКУ города Сочи" Управление капитального строительства"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
2.1.1.1	Объектов водоснабжения и водоотведения	единиц	увеличение значений					
2.1.1.2	Магистральных канализационных коллекторов	единиц	увеличение значений					
2.1.1.3	Объектов берегоукрепления и гидротехнических сооружений	единиц	увеличение значений					
2.1.2	Количество построенных объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, из них, из них	единиц	увеличение значений	суммарное значение объектов, введенных в эксплуатацию в течение соответствующего года	показатель формируется на основании полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" разрешений на ввод в эксплуатацию объектов муниципальной собственности	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
2.1.2.1	Объектов водоснабжения и водоотведения	единиц	увеличение значений					
2.1.2.2	Магистральных канализационных коллекторов	единиц	увеличение значений					
2.1.2.3	Объектов берегоукрепления и гидротехнических сооружений	единиц	увеличение значений					
3.1. Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоотведения города Сочи"	
(введен Постановлением администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
3.1.1.	Количество разрабатываемых комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий	Единиц	увеличение значений	суммарное значение проектируемых объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании копий муниципальных контрактов, заключенных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
3.1.2.	Количество разработанной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы	единиц	увеличение значений	суммарное значение проектируемых объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании копий положительных заключений экспертиз, полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
3.1.3.	Количество строящихся и реконструируемых объектов водоотведения	единиц	снижение значения	суммарное значение строящихся и реконструируемых объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании форм КС-2, КС-3, полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
3.1.4.	Количество строящихся и реконструируемых канализационных напорных коллекторов							
3.1.5.	Количество построенных и реконструированных объектов водоотведения	единиц	снижение значения	суммарное значение построенных и реконструированных объектов в течение соответствующего года	показатель формируется на основании копий актов ввода в эксплуатацию, полученных МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом	
3.1.6.	Количество построенных и реконструированных канализационных напорных коллекторов							

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СОЧИ"

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
от 28.07.2022 N 2437, от 04.10.2022 N 3334, от 21.10.2022 N 3576)		

N п/п	Наименование мероприятия	Статус <1>	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей	Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель	
				всего	в разрезе источников финансирования			
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цель 1. Повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры	
1.1	Задача 1.1. Обеспечение водоснабжением и водоотведением населенных пунктов на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению на территории города Сочи		2022	18635,1	-	-	18635,1	-			
			2022 <*>	197,5	-	-	197,5	-			
			2023	2204,0	-	-	2204,0	-			
			2024	65361,5	-	-	65361,5	-			
			2025	80695,8	-	-	80695,8	-			
			всего <*>	197,5	-	-	197,5	-			
			всего	166896,4	-	-	166896,4	-			
(п. 1.1.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.1	Водоснабжение и канализование жилого микрорайона ул. Батумское шоссе (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	-	-	-	-	-			
(п. 1.1.1.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.2	Водоснабжение с. Галицыно, с. Казачий Брод Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	46152,3	-	-	46152,3	-	Разработка ПИР (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)	"Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2025	80695,8	-	-	80695,8	-	Строительная готовность - 17,5%		
			всего	46152,3	-	-	46152,3	-			
1.1.1.3	Строительство сетей водоснабжения по ул. Володарского Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	2619,2	-	-	2619,2	-	Разработка ПСД - 18 %	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	2204,0	-	-	2204,0	-	Разработка ПСД 40%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	19209,2	-	-	19209,2	-	Строительная готовность - 15%		
			2025	-	-	-		-			
			всего	24032,4	-	-	24032,4	-			
(п. 1.1.1.3 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.4	Водоснабжение с. Ахштырь Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-		-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2022 <*>	197,5			197,5		Кадастровые работы <**>		
			2023	-	-	-		-			
			2024	-	-	-		-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	197,5	-	-	197,5	-			
			всего	-	-	-	-	-			
1.1.1.5	Инженерная защита Имеретинской низменности и водоотведение п. Мирный Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, реконструкция)		2022	16015,9	-	-	16015,9	-	Оплата по исполнительному листу ФС 028332597 от 30.01.2020	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-		-			
			2024	-	-	-		-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	16015,9	-	-	16015,9	-			
		
1.2	Задача 1.2. Обеспечение газоснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
1.2.1	Основное мероприятие 1.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция сетей газоснабжения, теплоснабжения на территории города Сочи		2022	9532,1	-	-	9532,1	-			
			2022 <*>	265,8	-	-	265,8	-			
			2023	91983,8	-	-	91983,8	-			
			2024	39895,9	-	-	39895,9	-			
			2025	39895,9	-	-	39895,9	-			
			всего <*>	265,8	-	-	265,8	-			
			всего	181307,7	-	-	181307,7	-			
(п. 1.2.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.2.1.1	Строительство сетей газоснабжения Молодежного микрорайона Лазаревского района (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	12300,0	-	-	12300,0	-	Выполнение проектно-изыскательских работ - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	12300,0	-	-	12300,0	-			
1.2.1.2	Газоснабжение с. Измайловка, с. Семеновка Хостинского района г. Сочи (вторая очередь) (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	46463,8	-	-	46463,8	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	16380,0	-	-	16380,0	-	Строительная готовность - 9%		
			2025	16380,0	-	-	16380,0	-	Строительная готовность - 18%		
			всего	79223,8	-	-	79223,8	-			
1.2.1.3	Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3 и более детей в с. Верхнениколаевское Адлерского внутригородского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	7064,4	-	-	7064,4	-	Выполнение ПИР (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	12715,9	-	-	12715,9	-	Строительная готовность - 17%		
			2025	12715,9	-	-	12715,9	-	Строительная готовность - 34%		
			всего	32496,2	-	-	32496,2	-			
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.2.1.4	Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3 и более детей, в п. Аше Лазаревского внутригородского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	12000,0	-	-	12000,0	-	Выполнение ПИР (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	10800,0	-	-	10800,0	-	Строительная готовность - 11%		
			2025	10800,0	-	-	10800,0	-	Строительная готовность - 22%		
			всего	33600,0	-	-	33600,0	-			
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.2.1.5	Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3 и более детей, в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	14155,6	-	-	14155,6	-	Разработка ПИР - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение). Строительная готовность - 11%		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	14155,6	-	-	14155,6	-			
(п. 1.2.1.5 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.2.1.6	Газоснабжение села Раздольное Хостинского района г. Сочи - разводящие сети	1	2022	9532,1	-	-	9532,1	-	Строительная готовность - 100%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	9532,1	-	-	9532,1	-			
1.2.1.7	Газификация ул. Леси Украинки Хостинского района города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	1	2022	-	-	-		-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2022 <*>	125,0	-	-	125,0	-	Кадастровые работы, газоопасные работы (врезка) <**>		
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	125,0	-	-	125,0	-			
			всего	-	-	-	-	-			
1.2.1.8	Газоснабжение пос. Лоо Лазаревского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-		-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2022 <*>	70,8			70,8		Газоопасные работы (врезка). <**>		
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	70,8	-	-	70,8	-			
			всего	-	-	-	-	-			
1.2.1.9	Газоснабжение п. Аше, п. Шхафит, п. Мамедова Щель, ул. Новая п. Лазаревское Лазаревского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-			
			2022 <*>	70,0	-	-	70,0	-	этап п. Мамедова Щель - газоопасные работы (врезка) <**>	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	70,0	-	-	70,0	-			
			всего	-	-	-	-	-			
											
1.3	Задача 1.3. Обеспечение электроснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
1.3.1	Основное мероприятие 1.3.1 "Проектирование, строительство, реконструкция сетей электроснабжения и связи на территории города Сочи"		2022	11772,8	-	-	11772,8	-			
			2022 <*>	987,0	-	-	987,0	-			
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			всего <*>	987,0	-	-	987,0	-			
			всего	11772,8	-	-	11772,8	-			
1.3.1.1	Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в с. Верхнениколаевское Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	355,7	-	-	355,7	-	Археологические изыскания (100%)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2022 <*>	987,0	-	-	987,0	-	Разработка ПСД (1 проект). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение) <**>		
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	987,0	-	-	987,0	-			
			всего	355,7	-	-	355,7	-			
1.3.1.2	Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	10506,7	-	-	10506,7	-	Строительная готовность 18%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	10506,7	-	-	10506,7	-			
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.3.1.3	Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Аше Лазаревского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) (корректировка сметной документации)	1	2022	308,6	-	-	308,6	-	Корректировка ПСД (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-		-	-	-			
			всего	308,6	-	-	308,6	-			
1.3.1.4	Электроснабжение 66 кв. жилого дома на Мацесте для ветеранов ВОВ		2022	601,8	-	-	601,8	-	Оплата исполнительного листа ФС N 032305500 от 12.04.2021. Лабораторные испытания (1 заключение)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	601,8	-	-	601,8	-			
1.4	Задача 1.4. Строительство и реконструкция дорог общего пользования	
1.4.1	Основное мероприятие 1.4.1 "Проектирование, строительство, реконструкция дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории города Сочи"		2022	3384,6	-	-	3384,6	-			
			2023	14078,2	-	-	14078,2	-			
			2024	37334,3	-	-	37334,3	-			
			2025	22000,0	-	-	22000,0	-			
			всего	76797,1	-	-	76797,1	-			
1.4.1.1	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования с инженерной подготовкой территории по ул. Фурманова Хостинского района города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	1	2022	3384,6	-	-	3384,6	-	Строительная готовность - 3%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление автомобильных дорог" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
			2023	3983,2	-	-	3983,2	-	Строительная готовность - 6%		
			2024	15334,3	-	-	15334,3	-	Строительная готовность - 100%		
			2025	-	-	-		-			
			всего	22702,1	-	-	22702,1	-	Протяженность автомобильной дороги - 1,1 км		
1.4.1.2	Строительство автомобильной дороги к земельным участкам, выделенным для многодетных семей, расположенных в п. Кудепста города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление автомобильных дорог" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	10095,0	-	-	10095,0	-	Проектно-изыскательские работы 100% (1 проект)		
			2024	22000,0	-	-	22000,0	-	Строительная готовность - 50%		
			2025	22000,0	-	-	22000,0	-	Строительная готовность - 100%		
			всего	54095,0	-	-	54095,0	-	Протяженность автомобильной дороги - 2,1 км		
1.5	Задача 1.5. Финансирование расходов по содержанию муниципальных казенных учреждений и обеспечению деятельности органов местного самоуправления	
1.5.1	Основное мероприятие 1.5.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений		2022	101702,1	-	-	101684,4	-			
			2023	73174,0	-	-	73174,0	-			
			2024	73191,7	-	-	73191,7	-			
			2025	75578,9	-	-	75578,9	-			
			всего	323646,7	-	-	323646,7	-			
(п. 1.5.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.5.1.1	Обеспечение деятельности департамента строительства администрации города Сочи		2022	38201,2	-	-	38201,2	-	Обеспечение функций в строительстве	Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
			2023	34837,7	-	-	34837,7	-			
			2024	34855,4	-	-	34855,4	-			
			2025	37242,6	-	-	37242,6	-			
			всего	145136,9	-	-	145136,9	-			
(п. 1.5.1.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.5.1.2	Содержание муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление капитального строительства"		2022	63483,2	-	-	63483,2	-	Обеспечение выполнения уставных функций муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление капитального строительства"	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	38336,3	-	-	38336,3	-			
			2024	38336,3	-	-	38336,3	-			
			2025	38336,3	-	-	38336,3	-			
			всего	178492,1	-	-	178492,1	-			
(п. 1.5.1.2 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.5.2	Основное мероприятие 1.1.2 "Прочие мероприятия, связанные с выполнением муниципальных функций в сфере строительства города Сочи"		2022	17,7	-	-	17,7	-			
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	17,7	-	-	17,7	-			
(п. 1.5.2 введен Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.5.2.1	Выполнение прочих обязательств муниципального образования		2022	17,7	-	-	17,7	-	2022: оплата исполнительного листа - 1 шт.	Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	17,7	-	-	17,7	-			
(п. 1.5.2.1 введен Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.6	Задача 1.6. Поддержание эксплуатационных показателей объектов капитального строительства на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
1.6.1	Основное мероприятие 1.6.1. Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, аварийно-восстановительные работы, техническое и (или) аварийно-диспетчерское обслуживание объектов муниципальной собственности		2022	54777,9	-	-	54777,9	-			
			2022 <*>	1590,0	-	-	1590,0	-			
			2023	263859,1	-	-	263859,1	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	1590,0	-	-	1590,0	-			
			всего	318637,0	-	-	318637,0	-			
(п. 1.6.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.6.1.1	Капитальный ремонт здания администрации города Сочи, расположенного по ул. Советская, 26 (включая проектно-изыскательские работы)		2022	30063,0	-	-	30063,0	-	Капитальный ремонт здания (95%)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2022 <*>	1590,0	-	-	1590,0	-	Разработка ПСД - 100% <**>		
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	1590,0	-	-	1590,0	-			
			всего	30063,0	-	-	30063,0	-			
1.6.1.2	Аварийно-восстановительные работы сетей газоснабжения объектов муниципальной собственности		2022	594,2	-	-	594,2	-	Аварийно-восстановительные работы (2 мероприятия в с. Волковка)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	594,2	-	-	594,2	-			
1.6.1.3	Техническое и (или) аварийно-диспетчерское обслуживание объектов муниципальной собственности		2022	277,2	-	-	277,2	-	Оплата исполнительного листа ФС N 032304923 от 04.07.2021. Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание (3 объекта)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	277,2	-	-	277,2	-			
1.6.1.4	Капитальный ремонт здания администрации Адлерского внутригородского района города Сочи, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Кирова, 53		2022	8207,3	-	-	8207,3	-	Разработка ПИР 100%. Капитальный ремонт фасада и кровли 100%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	8207,3	-	-	8207,3	-			
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.6.1.5	Капитальный ремонт кровли здания администрации Нижнешиловского сельского округа Адлерского внутригородского района города Сочи, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Каспийская, 64		2022	-	-	-	-	-		Администрация Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	-	-	-	-	-			
(п. 1.6.1.5 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.6.1.6	Капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных по адресу: ул. Связная, 3 Лазаревского внутригородского района МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2022	450,0	-	-	450,0	-	Разработка ПСД (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	450,0	-	-	450,0	-			
1.6.1.7	Капитальный ремонт нежилых помещений здания 1 этажа, расположенных по адресу: город Сочи, Центральный внутригородской район, ул. Горького, д. 37		2022	575,0	-	-	575,0	-	Разработка ПСД (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	575,0	-	-	575,0	-			
(п. 1.6.1.7 введен Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.6.1.8	Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Сочи по ул. Парковая, Центрального района, г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)		2022	14611,2	-	-	14611,2	-	Разработка ПИР 100%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	263859,1	-	-	263859,1	-	Положительное заключение экспертизы (1 заключение). Капитальный ремонт - 100%		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	278470,3	-	-	278470,3	-			
(п. 1.6.1.8 введен Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.7	Задача 1.7. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения и социально значимых объектов	
1.7.1	Основное мероприятие 1.7.1. Создание и обустройство (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, технологическое присоединение, приобретение и установка оборудования) мест массового отдыха населения и социально значимых объектов, в том числе жилых домов на территории города Сочи		2022	35153,5	-	35147,0	6,5	-			
			2022 <*>	2167,8	-	2167,8	-	-			
			2023	51877,7	-	21000,0	30877,7	-			
			2024	20000,0	-	20000,0	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	2167,8	-	2167,8	-	-			
			всего	107031,2	-	76147,0	30884,2	-			
(п. 1.7.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.7.1.1	Офис врача общей практики, расположенный по улице Джапаридзе, в районе дома N 88 села Пластунка Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	31737,8	-	31737,8	-	-	Строительная готовность - 100%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	31737,8	-	31737,8	-	-			
(п. 1.7.1.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.7.1.2	Офис врача общей практики, расположенный в с. Красная Воля Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	2000,0	-	2000,0	-	-	Разработка ПСД (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	20000,0	-	20000,0	-	-	Строительная готовность - 100%		
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	22000,0	-	22000,0	-	-			
1.7.1.3	Офис врача общей практики, расположенный в с. Каштаны Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022	3409,2	-	3409,2	-	-	Разработка ПСД (100%). Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	19000,0	-	19000,0	-	-	Строительная готовность - 100%		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	22409,2	-	22409,2	-	-			
(п. 1.7.1.3 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.7.1.4	Офис врача общей практики, расположенный в п. Орел-Изумруд Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022 <*>	261,6	-	261,6	-	-	Строительная готовность - 100% <**>	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	261,6	-	261,6	-	-			
			всего	-	-	-	-	-			
1.7.1.5	Офис врача общей практики, расположенный в ауле Хаджико Лазаревского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	1	2022 <*>	1906,2	-	1906,2	-	-	Строительная готовность - 100% <**>	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	1906,2	-	1906,2	-	-			
			всего	-	-	-	-	-			
1.7.1.6	Офис врача общей практики, расположенный по улице Измайловской, в районе дома N 186, села Измайловка Хостинского района города Сочи		2022	6,5	-		6,5	-	Оплата по исполнительному листу ФС 034471445 от 25.01.2022	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-		-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	6,5	-	-	6,5	-			
1.7.1.7	Исключен. - Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334	
1.7.1.8	Реконструкция пешеходного моста через реку Псахе, по ул. Анапская - Крымская, Центрального района, г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	30877,7	-	-	30877,7	-	Разработка ПИР (100%). Положительное заключение экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	30877,7	-	-	30877,7	-			
											
1.8	Задача 1.8. Снижение риска возникновения оползневых процессов	
1.8.1	Основное мероприятие 1.8.1 "Проведение мероприятий на территории города Сочи, направленных на укрепление существующих и возведение новых подпорных сооружений (обследование объектов)"		2022	600,0	-	-	600,0	-			
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	600,0	-	-	600,0	-			
1.8.1.1	Обследование и диагностика оползневых участков, находящихся в муниципальной собственности		2022	600,0	-	-	600,0	-	обследование 40 объектов	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	600,0	-	-	600,0	-			
1.9	Задача 1.9. Проведение комплексных мероприятий в целях обеспечения рационального и эффективного землепользования на территории города Сочи	
1.9.1	Основное мероприятие 1.9.1 "Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории города Сочи"		2022	997,9	-	-	997,9	-			
			2022 <*>	679,6	-	-	679,6	-			
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	679,6	-	-	679,6	-			
			всего	997,9	-	-	997,9	-			
1.9.1.1	Снос нежилого здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Хостинский район, улица Бытха, дом 20		2022	262,9	-	-	262,9	-	Обследование (1 заключение). Разработка проекта демонтажа (1 проект) <**>	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2022 <*>	679,6	-	-	679,6	-			
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего <*>	679,6	-	-	679,6	-			
			всего	262,9	-	-	262,9	-			
1.9.1.2	Снос самовольно возведенных пристроек расположенных по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лермонтова, 1		2022	735,0	-	-	735,0	-	Разработка проекта демонтажа (1 проект)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	-	-	-	-	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	735,0	-	-	735,0	-			
	Итого:		2022	236556,0	-	35147,0	201409,0	-			
			2022 <*>	5887,7	-	2167,8	3719,9	-			
			2023	497194,5	-	21000,0	476194,5	-			
			2024	235783,4	-	20000,0	215783,4	-			
			2025	218170,6	-	-	218170,6	-			
			всего <*>	5887,7	-	2167,8	3719,9	-			
			всего	1187704,5	-	76147,0	1111557,5	-			
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	

--------------------------------
<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующем периоде;
<**> - непосредственный результат, не достигнутый в предшествующем периоде.
<1> Статус "1" - мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения.
<1> Статус "2" - мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606 целевых показателей.
<1> Статус "3" - мероприятие является мероприятием федеральных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов.

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Водоснабжение и канализование жилого
микрорайона ул. Батумское шоссе
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность сети водопровода 2252,9 м. Общая протяженность сети канализации 1821 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	87932,9	9607,9	-	78325,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	87932,9	9607,9	-	78325,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	9607,9	9607,9	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	9607,9	9607,9	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	78325,0	-	-	78325,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-		-		-	-	-	
	бюджет города Сочи	78325,0	-	-	78325,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	23706,4	9607,9	-	14098,5	-		-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	14098,5	-	-	14098,5	-	-	-	
	бюджет города Сочи	9607,9	9607,9	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-					-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	9607,9	9607,9	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	9607,9	9607,9	-		-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	14098,5	-	-	14098,5	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	14098,5	-	-	14098,5	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 5
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Водоснабжение с. Галицыно, с. Казачий Брод
Адлерского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Водовод протяженностью 3600 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2026 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	88304,5	491,5	7117,2	-	-	-	80695,8	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	88304,5	491,5	7117,2	-	-	-	80695,8	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	88304,5	491,5	7117,2	-	-	-	80695,8	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	88304,5	491,5	7117,2	-	-	-	80695,8	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	134456,8	491,5	7117,2	-	-	46152,3	80695,8	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	134456,8	491,5	7117,2	-	-	46152,3	80695,8	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	88304,5	491,5	7117,2	-	-	-	80695,8	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	88304,5	491,5	7117,2	-	-	-	80695,8	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	46152,3	-	-	-	-	46152,3	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 6
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей водоснабжения по ул. Володарского
Хостинского района города Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей водоснабжения - 3000 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2029 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7		8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	164494,7	-	-	5274,4	82993,3	76227,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	164494,7	-	-	5274,4	82993,3	76227,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	12040,7	-	-	5274,4	6766,3	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	12040,7			5274,4	6766,3	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	152454,0	-	-	-	76227,0	76227,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	152454,0				76227,0	76227,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	26687,6	-	-	5274,4	2204,0	19209,2	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	26687,6	-	-	5274,4	2204,0	19209,2	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	6012,2	-	-	5274,4	737,8	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	6012,2	-	-	5274,4	737,8	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	20675,4	-	-	-	1466,2	19209,2	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	20675,4	-	-	-	1466,2	19209,2	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 7
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей водоснабжения и водоотведения
в Молодежном микрорайоне Лазаревского
внутригородского района г. Сочи
(включая проектные и изыскательские работы)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей водоснабжения - 10270 м.
Протяженность сетей канализации - 10270 м.
Объем 450 м куб./сутки	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	384200,0	-	-	-	22900,0	344056,7	17243,3	
	федеральный бюджет	268364,2	-	-	-	-	268364,2	-	
	краевой бюджет	35288,3	-	-	-	21526,0	13762,3	-	
	бюджет города Сочи	80547,5	-	-	-	1374,0	61930,2	17243,3	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	22900,0	-	-	-	22900,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	21526,0	-	-	-	21526,0	-	-	
	бюджет города Сочи	1374,0		-	-	1374,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	361300,0	-	-	-	-	344056,7	17243,3	
	федеральный бюджет	268364,2	-	-	-	-	268364,2	-	
	краевой бюджет	13762,3	-	-	-	-	13762,3	-	
	бюджет города Сочи	79173,5		-		-	61930,2	17243,3	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	51585,9	-	-	-	22900,0	11442,6	17243,3	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	21526,0	-	-	-	21526,0	-	-	
	бюджет города Сочи	30059,9	-	-	-	1374,0	11442,6	17243,3	
	иные источники	-	-	-	-	-	-		
в том числе:		-						-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	22900,0	-	-	-	22900,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	21526,0	-	-	-	21526,0	-	-	
	бюджет города Сочи	1374,0	-	-	-	1374,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	28685,9	-	-	-	-	11442,6	17243,3	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	28685,9	-	-	-	-	11442,6	17243,3	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 8
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей водоснабжения и водоотведения
в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям,
имеющим 3 и более детей, в с. Верхнениколаевское Адлерского
внутригородского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей водоснабжения - 5690 м.
Протяженность сетей канализации - 5690 м.
Объем 248 м куб./сут.	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования,
тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	222536,5	-	-	7484,5	106580,0	108472,0	-	
	федеральный бюджет	161906,2	-	-	-	77298,0	84608,2	-	
	краевой бюджет	44477,1	-	-	-	24908,8	19568,3	-	
	бюджет города Сочи	16153,2	-	-	7484,5	4373,2	4295,5	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	14964,5	-	-	7484,5	7480,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7031,2	-	-	-	7031,2	-	-	
	бюджет города Сочи	7933,3	-	-	7484,5	448,8	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	207572,0	-	-	-	99100,0	108472,0	-	
	федеральный бюджет	161906,2	-	-	-	77298,0	84608,2	-	
	краевой бюджет	37445,9	-	-	-	17877,6	19568,3	-	
	бюджет города Сочи	8219,9	-	-		3924,4	4295,5	-	
	иные источники	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	14964,5	-	-	7484,5	7480,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7031,2	-	-	-	7031,2	-	-	
	бюджет города Сочи	7933,3	-	-	7484,5	448,8	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	14964,5	-	-	7484,5	7480,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7031,2	-	-	-	7031,2	-	-	
	бюджет города Сочи	7933,3	-	-	7484,5	448,8	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 9
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей водоснабжения и водоотведения
в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям,
имеющим 3 и более детей, в пос. Аше Лазаревского
внутригородского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей водоснабжения - 380 м.
Протяженность сетей канализации - 380 м.
Объем 75 м куб./сутки	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2023 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	60028,5	-	-	6028,5	54000,0	-	-	
	федеральный бюджет	42120,0	-	-	-	42120,0	-	-	
	краевой бюджет	9741,6	-	-	-	9741,6	-	-	
	бюджет города Сочи	8166,9	-	-	6028,5	2138,4	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	6028,5	-	-	6028,5	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	6028,5	-	-	6028,5	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	54000,0	-	-	-	54000,0	-	-	
	федеральный бюджет	42120,0	-	-	-	42120,0	-	-	
	краевой бюджет	9741,6	-	-	-	9741,6	-	-	
	бюджет города Сочи	2138,4	-	-	-	2138,4	-	-	
	иные источники	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	12057,0	-	-	6028,5	6028,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	12057,0	-	-	6028,5	6028,5	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	12057,0	-	-	6028,5	6028,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	12057,0	-	-	6028,5	6028,5	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 10
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей водоснабжения и водоотведения
в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям,
имеющим 3 и более детей, в пос. Кудепста Адлерского
внутригородского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей водоснабжения - 5320 м.
Протяженность сетей канализации - 5320 м.
Объем 213 м куб./сутки	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	209849,1	-	-	7942,4	7940,0	180695,0	13271,7	
	федеральный бюджет	32525,1	-	-	-	-	32525,1	-	
	краевой бюджет	14691,4	-	-	-	7463,6	7227,8	-	
	бюджет города Сочи	162632,6	-	-	7942,4	476,4	140942,1	13271,7	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	15882,4	-	-	7942,4	7940,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7463,6	-	-	-	7463,6	-	-	
	бюджет города Сочи	8418,8		-	7942,4	476,4	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	193966,7	-	-	-	-	180695,0	13271,7	
	федеральный бюджет	32525,1	-	-	-	-	32525,1	-	
	краевой бюджет	7227,8	-	-	-	-	7227,8	-	
	бюджет города Сочи	154213,8		-	-	-	140942,1	13271,7	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	36625,1	-	-	7942,4	7940,0	7471,0	13271,7	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7463,6	-	-	-	7463,6	-	-	
	бюджет города Сочи	29161,5	-	-	7942,4	476,4	7471,0	13271,7	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	15882,4	-	-	7942,4	7940,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7463,6	-	-	-	7463,6	-	-	
	бюджет города Сочи	8418,8	-	-	7942,4	476,4	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	20742,7	-	-	-	-	7471,0	13271,7	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	20742,7	-	-	-		7471,0	13271,7	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 11
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей водоснабжения и водоотведения
в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям,
имеющим 3 и более детей, в пос. Вардане, пер. Огородный
(ЗУ NN 20 - 26), Лазаревский внутригородской район г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей водоснабжения - 370 м.
Протяженность сетей канализации - 370 м.
Объем 60 м куб./сутки	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	49486,6		-	7783,5	7780,0	33923,1	-	
	федеральный бюджет	18128,8	-	-	-	-	18128,8	-	
	краевой бюджет	11506,1	-	-	-	7313,2	4192,9	-	
	бюджет города Сочи	19851,7		-	7783,5	466,8	11601,4	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	15563,5		-	7783,5	7780,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7313,2	-	-	-	7313,2	-	-	
	бюджет города Сочи	8250,3		-	7783,5	466,8	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	33923,1	-	-	-	-	33923,1	-	
	федеральный бюджет	18128,8	-	-	-	-	18128,8	-	
	краевой бюджет	4192,9	-	-	-	-	4192,9	-	
	бюджет города Сочи	11601,4	-	-	-	-	11601,4	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	27164,9	-	-	7783,5	7780,0	11601,4	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7313,2	-	-	-	7313,2	-	-	
	бюджет города Сочи	19851,7	-	-	7783,5	466,8	11601,4	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	15563,5	-	-	7783,5	7780,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7313,2	-	-	-	7313,2	-	-	
	бюджет города Сочи	8250,3		-	7783,5	466,8	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	11601,4	-	-	-	-	11601,4	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	11601,4	-	-	-	-	11601,4	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 12
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей газоснабжения Молодежного
микрорайона Лазаревского района
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность газопровода - 9060 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	135300,0	-	-	-	12300,0	123000,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	135300,0	-	-	-	12300,0	123000,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	12300,0	-	-	-	12300,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	12300,0			-	12300,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	123000,0	-	-	-	-	123000,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	123000,0	-	-	-	-	123000,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	12300,0	-	-	-	12300,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	12300,0	-	-	-	12300,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	12300,0	-	-	-	12300,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	12300,0	-	-	-	12300,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 13
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Газоснабжение с. Измайловка, с. Семеновка
Хостинского района г. Сочи (вторая очередь)
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность газопровода - 16150 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2026 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	255641,8	10798,0	-	-	46463,8	182000,0	16380,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	255641,8	10798,0	-	-	46463,8	182000,0	16380,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	73641,8	10798,0	-	-	46463,8	-	16380,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	73641,8	10798,0	-	-	46463,8	-	16380,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	182000,0	-	-	-	-	182000,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	182000,0	-	-	-	-	182000,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	90021,8	10798,0	-	-	46463,8	16380,0	16380,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	90021,8	10798,0	-	-	46463,8	16380,0	16380,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	57261,8	10798,0	-	-	46463,8	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	57261,8	10798,0	-	-	46463,8	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	32760,0	-	-	-	-	16380,0	16380,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	32760,0	-	-	-	-	16380,0	16380,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 14
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне
с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3
и более детей в с. Верхнениколавеское Адлерского
внутригородского района г. Сочи (проектно-изыскательские
работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Газопровод протяженностью - 1000 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2026 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	83241,6	-	1177,2	-	7064,4	62284,1	12715,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	83241,6	-	1177,2	-	7064,4	62284,1	12715,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	8241,6	-	1177,2	-	7064,4	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	8241,6	-	1177,2	-	7064,4			
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	75000,0	-	-	-	-	62284,1	12715,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	75000,0	-	-	-		62284,1	12715,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	33673,4	-	1177,2	-	7064,4	12715,9	12715,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	33673,4	-	1177,2	-	7064,4	12715,9	12715,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	8241,6	-	1177,2	-	7064,4	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	8241,6	-	1177,2	-	7064,4	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	25431,8	-	-	-	-	12715,9	12715,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	25431,8	-	-	-	-	12715,9	12715,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 15
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне
с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3
и более детей в п. Аше Лазаревского внутригородского
района г. Сочи (проектно-изыскательские работы,
строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Газопровод протяженностью - 1000 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	37080,4	-	3480,4	-	12000,0	10800,0	10800,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	37080,4	-	3480,4	-	12000,0	10800,0	10800,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	15480,4	-	3480,4	-	12000,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	15480,4	-	3480,4	-	12000,0			
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	21600,0	-	-	-	-	10800,0	10800,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	21600,0	-	-	-		10800,0	10800,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	37080,4	-	3480,4	-	12000,0	10800,0	10800,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	37080,4	-	3480,4	-	12000,0	10800,0	10800,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	15480,4	-	3480,4	-	12000,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	15480,4	-	3480,4	-	12000,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	21600,0	-	-	-	-	10800,0	10800,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	21600,0	-	-	-	-	10800,0	10800,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 16
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне
с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3
и более детей, в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Газопровод протяженностью - 1000 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	79750,1	-	1108,1	-	78642,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	79750,1	-	1108,1	-	78642,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1108,1	-	1108,1	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1108,1	-	1108,1	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	78642,0	-	-	-	78642,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	78642,0	-	-	-	78642,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	15263,7	-	1108,1	-	14155,6	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	15263,7	-	1108,1	-	14155,6	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1108,1	-	1108,1	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1108,1	-	1108,1	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	14155,6	-	-	-	14155,6	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	14155,6	-	-	-	14155,6	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 17
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Газоснабжение села Раздольное Хостинского района
г. Сочи - разводящие сети"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей газоснабжения 4170 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	37491,8	25459,7	2500,0	9532,1	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	11229,8	11229,8	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	26262,0	14229,9	2500,0	9532,1	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	5500,0	3000,0	2500,0	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	5500,0	3000,0	2500,0	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	31991,8	22459,7	-	9532,1	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	11229,8	11229,8	-		-			
	бюджет города Сочи	20762,0	11229,9	-	9532,1	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	37491,8	25459,7	2500,0	9532,1	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	11229,8	11229,8	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	26262,0	14229,9	2500,0	9532,1	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	5500,0	3000,0	2500,0	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	5500,0	3000,0	2500,0	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	31991,8	22459,7	-	9532,1	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	11229,8	11229,8	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	20762,0	11229,9	-	9532,1	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 18
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку
для многодетных семей в с. Верхнениколаевское
Адлерского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Мощность - 707 кВт	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	всего <*>	предшествующий период	2021 год	2022 год	2022 год <*>	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	100042,7	987,0	-	987,0	99055,7	987,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	100042,7	987,0	-	987,0	99055,7	987,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1342,7	987,0	-	987,0	355,7	987,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1342,7	987,0	-	987,0	355,7	987,0	-	-	-	
	иные источники	-	-								
выполнение строительно-монтажных работ	всего	98700,0	-	-	-	98700,0	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	98700,0	-	-	-	98700,0	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	1342,7	987,0	-	987,0	355,7	987,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1342,7	987,0	-	987,0	355,7	987,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1342,7	987,0	-	987,0	355,7	987,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1342,7	987,0		987,0	355,7	987,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

--------------------------------
<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующий период.

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 19
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Электроснабжение микрорайона, выделенного
под застройку для многодетных семей в п. Кудепста
Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские
работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей электроснабжения - 2489,6 м. Наружное освещение - 2489,6 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	62976,2	1200,0	3405,6	58370,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	62976,2	1200,0	3405,6	58370,6	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1200,0	1200,0	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-		-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1200,0	1200,0	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	61776,2	-	3405,6	58370,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	61776,2	-	3405,6	58370,6	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	15112,3	1200,0	3405,6	10506,7	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	15112,3	1200,0	3405,6	10506,7	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1200,0	1200,0	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1200,0	1200,0	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	13912,3	-	3405,6	10506,7	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	13912,3	-	3405,6	10506,7	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 20
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
с инженерной подготовкой территории по ул. Фурманова
Хостинского района города Сочи
(включая проектно-изыскательские работы)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Реконструкция	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление автомобильных дорог"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление автомобильных дорог"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Реконструкция дорожного полотна протяженностью 1100 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	129402,8	-	6605,5	3384,6	3983,2	115429,5	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	129402,8	-	6605,5	3384,6	3983,2	115429,5	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	6605,5	-	6605,5	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	6605,5	-	6605,5	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	122797,3	-	-	3384,6	3983,2	115429,5	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	122797,3		-	3384,6	3983,2	115429,5	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	29307,6	-	6605,5	3384,6	3983,2	15334,3	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	29307,6	-	6605,5	3384,6	3983,2	15334,3	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	6605,5	-	6605,5	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	6605,5	-	6605,5	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	22702,1	-	-	3384,6	3983,2	15334,3	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	22702,1	-	-	3384,6	3983,2	15334,3	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 21
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство автомобильной дороги к земельным участкам,
выделенным для многодетных семей, расположенных
в п. Кудепста города Сочи
(включая проектно-изыскательские работы)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление автомобильных дорог"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление автомобильных дорог"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Строительство автомобильной дороги протяженностью 2100 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	877300,0	-	-	-	10095,0	845205,0	22000,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	877300,0	-	-	-	10095,0	845205,0	22000,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	10095,0	-	-	-	10095,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	10095,0	-	-	-	10095,0	-	-	
	иные источники	-		-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	867205,0	-	-	-	-	845205,0	22000,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	867205,0		-	-	-	845205,0	22000,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	54095,0	-	-	-	10095,0	22000,0	22000,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	54095,0	-	-	-	10095,0	22000,0	22000,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	10095,0	-	-	-	10095,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	10095,0	-	-	-	10095,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	44000,0	-	-	-	-	22000,0	22000,0	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	44000,0		-	-	-	22000,0	22000,0	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 22
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Офис врача общей практики, расположенный по улице
Джапаридзе в районе дома N 88 села Пластунка Хостинского
района города Сочи (проектно-изыскательские работы,
строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая площадь объекта - 181,4 кв. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	34613,1	2875,3	-	31737,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	33237,8	1500,0	-	31737,8	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1375,3	1375,3	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	2875,3	2875,3	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	1500,0	1500,0	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1375,3	1375,3	-	-	-	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	31737,8	-	-	31737,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	31737,8		-	31737,8				
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	34613,1	2875,3	-	31737,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	33237,8	1500,0	-	31737,8	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1375,3	1375,3	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	2875,3	2875,3	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	1500,0	1500,0	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1375,3	1375,3	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	31737,8	-	-	31737,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	31737,8		-	31737,8				
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 23
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Офис врача общей практики, расположенный в с. Красная Воля
Адлерского района города Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая площадь объекта - 181,4 кв. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	21999,0	-	-	-	2000,0	19999,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	22000,0	-	-	-	2000,0	20000,0	-	
	бюджет города Сочи	- 1,0	-	-	-	-	- 1,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1999,0	-	-	-	2000,0	- 1,0	-	
	федеральный бюджет	-							
	краевой бюджет	2000,0				2000,0			
	бюджет города Сочи	- 1,0	-	-	-	-	- 1,0	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	20000,0	-	-	-	-	20000,0	-	
	федеральный бюджет	-							
	краевой бюджет	20000,0		-			20000,0	-	
	бюджет города Сочи	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	21999,0	-	-	-	2000,0	19999,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	22000,0	-	-	-	2000,0	20000,0	-	
	бюджет города Сочи	- 1,0	-	-	-	-	- 1,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1999,0	-	-	-	2000,0	- 1,0	-	
	федеральный бюджет	-							
	краевой бюджет	2000,0				2000,0			
	бюджет города Сочи	- 1,0	-	-	-		- 1,0	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	20000,0	-	-	-	-	20000,0	-	
	федеральный бюджет	-							
	краевой бюджет	20000,0		-			20000,0	-	
	бюджет города Сочи	-		-	-		-	-	
	иные источники	-							

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 24
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Офис врача общей практики, расположенный в с. Каштаны
Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские
работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая площадь объекта - 181,4 кв. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2023 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	21000,0	0,0	0,0	2000,0	19000,0	-	-	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	краевой бюджет	21000,0	0,0	0,0	2000,0	19000,0	-	-	
	бюджет города Сочи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
в том числе:		0,0							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	2000,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	-	-	
	федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0	0,0	-	-	
	краевой бюджет	2000,0	0,0	0,0	2000,0	0,0			
	бюджет города Сочи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	19000,0	0,0	0,0	0,0	19000,0	-	-	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	краевой бюджет	19000,0	0,0	0,0	0,0	19000,0	-	-	
	бюджет города Сочи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	22409,2	0,0	0,0	3409,2	19000,0	-	-	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	краевой бюджет	22409,2	0,0	0,0	3409,2	19000,0	-	-	
	бюджет города Сочи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
в том числе:		0,0							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	3409,2	0,0	0,0	3409,2	0,0	-	-	
	федеральный бюджет	0,0							
	краевой бюджет	3409,2			3409,2	0,0	-	-	
	бюджет города Сочи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	иные источники	0,0				0,0			
выполнение строительно-монтажных работ	всего	19000,0	0,0	0,0	0,0	19000,0	-	-	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	краевой бюджет	19000,0	0,0	0,0	0,0	19000,0	-	-	
	бюджет города Сочи	0,0	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	0,0	-	-	-	-	-	-	

Директор департамента
транспорта и дорожного
хозяйства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.А.НЕДВИЖАЙ

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение 25
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 02.03.2022 N 490;
в ред. Постановлений администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
от 29.04.2022 N 1230, от 02.06.2022 N 1635, от 28.07.2022 N 2437,
от 04.10.2022 N 3334, от 21.10.2022 N 3576)		

ПАСПОРТ
подпрограммы "Комплексное развитие муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края, реализуемое в рамках распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 6 ноября 2021 года N 3143-р"

Координатор подпрограммы	департамент реализации проектов комплексного развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Участники подпрограммы	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Цель подпрограммы	повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края объектами коммунальной инфраструктуры и обеспечение защищенности от негативного воздействия вод пляжных территорий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечивающие экологически благоприятные условия жизни населения	
Задачи подпрограммы	создание объектов инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края;
создание объектов берегоукрепления и гидротехнических сооружений на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Перечень целевых показателей подпрограммы	количество положительных заключений государственной экспертизы
количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Проекты и (или) программы	не предусмотрены	
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2025 годы, этапы не предусмотрены	
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)	
Объем финансирования муниципальной подпрограммы, тыс. рублей	всего	в разрезе источников финансирования	
Годы реализации		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники	
2022 год	29238,9	0,0	0,0	29238,9	0,0	
2023 год	601918,6	0,0	232744,0	369174,6	0,0	
2024 год	30515,0	0,0	0,0	30515,0	0,0	
2025 год	30515,0	0,0	0,0	30515,0	0,0	
Всего	692187,50	0,0	232744,0	459443,5	0,0	
расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	
2022 год	29238,9	0,0	0,0	29238,9	0,0	
2023 год	601918,6	0,0	232744,0	369174,6	0,0	
2024 год	30515,0	0,0	0,0	30515,0	0,0	
2025 год	30515,0	0,0	0,0	30515,0	0,0	
Всего	692187,5	0,0	232744,0	459443,5	0,0	
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор - департамент реализации проектов комплексного развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, который:
обеспечивает разработку, реализацию, координацию деятельности участников подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;
организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;
осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы в целом;
осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).
Участники подпрограммы в пределах своей компетенции:
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы;
ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным годом представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик мероприятия:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.И.НИКОЛАЕВ

Приложение
к подпрограмме
"Комплексное развитие
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края,
реализуемое в рамках распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 6 ноября 2021 года N 3143-р"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗУЕМОЕ В РАМКАХ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 6 НОЯБРЯ 2021 ГОДА N 3143-Р"

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
от 28.07.2022 N 2437, от 04.10.2022 N 3334, от 21.10.2022 N 3576)		

N п/п	Наименование мероприятия	Статус <1>	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей	Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель	
				всего	в разрезе источников финансирования			
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цель 1. Повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края объектами коммунальной инфраструктуры и обеспечение защищенности от негативного воздействия вод пляжных территорий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечивающие экологически благоприятные условия жизни населения	
1.1	Задача 1.1. Создание объектов инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Проектирование, строительство объектов инфраструктуры		2022	29238,9	-	-	29238,9	-			
			2023	444918,6	-	232744,0	212174,6	-			
			2024	30515,0	-	-	30515,0	-			
			2025	30515,0	-	-	30515,0	-			
			всего	535187,5	-	232744,0	302443,5	-			
(п. 1.1.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.1	Обеспечение водоснабжения района "Благодать" муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (проектные и изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	14780,0	-	3008,0	11772,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	14780,0	-	3008,0	11772,0	-			
(п. 1.1.1.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.1.1.2	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3 и более детей, в с. Верхнениколаевское Адлерского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)	1	2022	7484,5	-	-	7484,5	-	Инженерные изыскания (100%)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	7480,0	-	7031,2	448,8	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	14964,5	-	7031,2	7933,3	-			
(п. 1.1.1.2 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.3	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского внутригородского района г. Сочи (включая проектные и изыскательские работы)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	22900,0	-	21526,0	1374,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	11442,6	-	-	11442,6	-	Строительная готовность (3,15%)		
			2025	17243,3	-	-	17243,3	-	Строительная готовность (8%)		
			всего	51585,9	-	21526,0	30059,9	-			
(п. 1.1.1.3 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.4	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3 и более детей, в пос. Аше Лазаревского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)	1	2022	6028,5	-	-	6028,5	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	6028,5	-	-	6028,5	-	Строительная готовность - 11%		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	12057,0	-	-	12057,0	-			
(п. 1.1.1.4 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.5	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3 и более детей, в пос. Кудепста Адлерского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)	1	2022	7942,4	-	-	7942,4	-	Инженерные изыскания (100%)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	7940,0	-	7463,6	476,4	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	7471,0	-	-	7471,0	-	Строительная готовность (3,85%)		
			2025	13271,7	-	-	13271,7	-	Строительная готовность (10,7%)		
			всего	36625,1	-	7463,6	29161,5	-			
(п. 1.1.1.5 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.6	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне с земельными участками, выделенными семьям, имеющим 3 и более детей, в пос. Вардане, пер. Огородный (ЗУ NN 20 - 26), Лазаревский внутригородской район г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)	1	2022	7783,5	-	-	7783,5	-	Инженерные изыскания (100%)	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	7780,0	-	7313,2	466,8	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	11601,4	-	-	11601,4	-	Строительная готовность (33,3%)		
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	27164,9	-	7313,2	19851,7	-			
(п. 1.1.1.6 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	
1.1.1.7	Строительство магистрального канализационного коллектора для водоотведения в мкр. Соболевка Хостинского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	62000,0	-	58280,0	3720,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	62000,0	-	58280,0	3720,0	-			
(п. 1.1.1.7 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.1.1.8	Строительство магистрального водовода от резервуаров "Чайфабрика" до границ Адлерского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	136300,0	-	128122,0	8178,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	136300,0	-	128122,0	8178,0	-			
(п. 1.1.1.8 в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)	
1.1.1.9	Реконструкция и строительство объектов и сетей системы водоснабжения Адлерского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	96912,7	-	-	96912,7	-	Проектно-изыскательские работы - 6%		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-		-			
			всего	96912,7	-	-	96912,7	-			
1.1.1.10	Реконструкция и строительство объектов и сетей системы водоотведения Лазаревского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	49363,5	-	-	49363,5	-	Проектно-изыскательские работы - 4%		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-		-			
			всего	49363,5	-	-	49363,5	-			
1.1.1.11	Реконструкция и строительство объектов и сетей системы водоотведения Адлерского внутригородского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция)	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	33433,9	-	-	33433,9	-	Проектно-изыскательские работы - 5%		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	33433,9	-	-	33433,9	-			
1.2	Задача 1.2. Создание объектов берегоукрепления и гидротехнических сооружений на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
1.2.1	Основное мероприятие 1.2.1 "Проектирование, строительство объектов берегоукрепления и гидротехнических сооружений на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"		2022	-	-	-	-	-			
			2023	157000,0	-	-	157000,0	-			
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	157000,0	-	-	157000,0	-			
1.2.1.1	Выполнение комплекса работ по берегоукреплению и отсыпке пляжных территории северного фрагмента берега в пос. Лазаревское от устья р. Куапсе до пляжа "Дельфин"	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	44900,0	-	-	44900,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	44900,0	-	-	44900,0	-			
1.2.1.2	Выполнение комплекса работ по берегоукреплению и отсыпке пляжных территорий от ж/д станции Якорная Щель до пос. Детляжка Лазаревского внутригородского района г. Сочи	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	56800,0	-	-	56800,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	56800,0	-	-	56800,0	-			
1.2.1.3	Выполнение комплекса работ по берегоукреплению и отсыпке пляжа "Свирский" в пос. Лазаревское Лазаревского внутригородского района г. Сочи	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края -	
			2023	23900,0	-	-	23900,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	23900,0	-	-	23900,0	-		главный распорядитель бюджетных средств	
1.2.1.4	Выполнение комплекса работ по берегоукреплению и отсыпке пляжных территорий в пос. Лоо Лазаревского внутригородского района г. Сочи	1	2022	-	-	-	-	-		Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	31400,0	-	-	31400,0	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение)		
			2024	-	-	-	-	-			
			2025	-	-	-	-	-			
			всего	31400,0	-	-	31400,0	-			
	Итого:		2022	29238,9	-	-	29238,9	-			
			2023	601918,6	-	232744,0	369174,6	-			
			2024	30515,0	-	-	30515,0	-			
			2025	30515,0	-	-	30515,0	-			
			всего	692187,5	-	232744,0	459443,5	-			
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)	

--------------------------------
<1> Статус "1" - мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения.
<1> Статус "2" - мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606 целевых показателей.
<1> Статус "3" - мероприятие является мероприятием федеральных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов.

Приложение 26
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Обеспечение водоснабжения района "Благодать" муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского
края (проектные и изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность сетей водоснабжения - 2000 м. Объем - 2282 м куб./сут.	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2023 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	407228,0	7228,0	-	-	400000,0	-	-	
	федеральный бюджет	300471,6	-	-	-	300471,6	-	-	
	краевой бюджет	72501,7	-	-	-	72501,7	-	-	
	бюджет города Сочи	34254,7	7228,0	-	-	27026,7	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	22008,0	7228,0	-	-	14780,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	3008,0	-	-	-	3008,0	-	-	
	бюджет города Сочи	19000,0	7228,0	-		11772,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	385220,0	-	-	-	385220,0	-	-	
	федеральный бюджет	300471,6	-	-	-	300471,6	-	-	
	краевой бюджет	69493,7	-	-	-	69493,7	-	-	
	бюджет города Сочи	15254,7	-	-	-	15254,7	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	22008,0	7228,0	-	-	14780,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	3008,0	-	-	-	3008,0	-	-	
	бюджет города Сочи	19000,0	7228,0	-	-	11772,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	22008,0	7228,0	-	-	14780,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	3008,0	-	-	-	3008,0	-	-	
	бюджет города Сочи	19000,0	7228,0	-		11772,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 27
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство магистрального канализационного
коллектора для водоотведения в мкр. Соболевка
Хостинского внутригородского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность магистрального канализационного коллектора - 2100 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	324400,0		-	-	62000,0	262400,0	-	
	федеральный бюджет	204672,0	-	-	-	-	204672,0	-	
	краевой бюджет	105617,0	-	-	-	58280,0	47337,0	-	
	бюджет города Сочи	14111,0		-	-	3720,0	10391,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	62000,0		-	-	62000,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	58280,0	-	-	-	58280,0	-	-	
	бюджет города Сочи	3720,0		-	-	3720,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	262400,0	-	-	-	-	262400,0	-	
	федеральный бюджет	204672,0	-	-	-	-	204672,0	-	
	краевой бюджет	47337,0	-	-	-	-	47337,0	-	
	бюджет города Сочи	10391,0	-	-	-	-	10391,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	62000,0	-	-	-	62000,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	58280,0	-	-	-	58280,0	-	-	
	бюджет города Сочи	3720,0	-	-	-	3720,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	62000,0	-	-	-	62000,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	58280,0	-	-	-	58280,0	-	-	
	бюджет города Сочи	3720,0		-	-	3720,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 28
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры
города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство магистрального водовода от резервуаров
"Чайфабрика" до границ Адлерского внутригородского
района г. Сочи (проектные и изыскательские работы,
строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность магистрального водовода - 5315 м, Ду 800	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2027 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	605024,0		-	-	136300,0	468724,0	-	
	федеральный бюджет	384200,0	-	-	-	-	384200,0	-	
	краевой бюджет	197431,7	-	-	-	128122,0	69309,7	-	
	бюджет города Сочи	23392,3		-	-	8178,0	15214,3	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	136300,0		-	-	136300,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	128122,0	-	-	-	128122,0	-	-	
	бюджет города Сочи	8178,0		-	-	8178,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	468724,0	-	-	-	-	468724,0	-	
	федеральный бюджет	384200,0	-	-	-	-	384200,0		
	краевой бюджет	69309,7	-	-	-	-	69309,7		
	бюджет города Сочи	15214,3	-	-	-	-	15214,3		
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	136300,0	-	-	-	136300,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	128122,0	-	-	-	128122,0	-	-	
	бюджет города Сочи	8178,0	-	-	-	8178,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	136300,0	-	-	-	136300,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	128122,0	-	-	-	128122,0	-	-	
	бюджет города Сочи	8178,0		-	-	8178,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 29
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Выполнение комплекса работ по берегоукреплению
и отсыпке пляжных территории северного фрагмента берега
в пос. Лазаревское от устья р. Куапсе до пляжа "Дельфин"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность пляжей - 1,3 км	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	253400,0		-	-	44900,0	208500,0	-	
	федеральный бюджет	162630,0	-	-	-	-	162630,0	-	
	краевой бюджет	37613,4	-	-	-	-	37613,4	-	
	бюджет города Сочи	53156,6		-	-	44900,0	8256,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	253400,0		-	-	44900,0	208500,0	-	
	федеральный бюджет	162630,0	-	-	-	-	162630,0	-	
	краевой бюджет	37613,4	-	-	-	-	37613,4	-	
	бюджет города Сочи	53156,6		-	-	44900,0	8256,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	44900,0	-	-	-	44900,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	44900,0	-	-	-	44900,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	44900,0	-	-	-	44900,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	44900,0		-	-	44900,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 30
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Выполнение комплекса работ по берегоукреплению
и отсыпке пляжных территорий от ж/д станции Якорная Щель
до пос. Детляжка Лазаревского внутригородского района
г. Сочи"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность пляжей - 2,1 км	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	316800,0		-	-	56800,0	260000,0	-	
	федеральный бюджет	202800,0	-	-	-	-	202800,0	-	
	краевой бюджет	46904,0	-	-	-	-	46904,0	-	
	бюджет города Сочи	67096,0		-	-	56800,0	10296,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	56800,0		-	-	56800,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	56800,0		-	-	56800,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	260000,0	-	-	-	-	260000,0	-	
	федеральный бюджет	202800,0	-	-	-	-	202800,0	-	
	краевой бюджет	46904,0	-	-	-	-	46904,0	-	
	бюджет города Сочи	10296,0	-	-	-	-	10296,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	56800,0	-	-	-	56800,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	56800,0	-	-	-	56800,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	56800,0	-	-	-	56800,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	56800,0		-	-	56800,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 31
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Выполнение комплекса работ по берегоукреплению
и отсыпке пляжа "Свирский" в пос. Лазаревское
Лазаревского внутригородского района г. Сочи"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность пляжей - 0,2 км	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	139900,0		-	-	23900,0	116000,0	-	
	федеральный бюджет	90480,0	-	-	-	-	90480,0	-	
	краевой бюджет	20926,4	-	-	-	-	20926,4	-	
	бюджет города Сочи	28493,6		-	-	23900,0	4593,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	139900,0		-	-	23900,0	116000,0	-	
	федеральный бюджет	90480,0	-	-	-	-	90480,0	-	
	краевой бюджет	20926,4	-	-	-	-	20926,4	-	
	бюджет города Сочи	28493,6		-	-	23900,0	4593,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	23900,0	-	-	-	23900,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	23900,0	-	-	-	23900,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	23900,0	-	-	-	23900,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	23900,0		-	-	23900,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 32
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Выполнение комплекса работ по берегоукреплению
и отсыпке пляжных территорий в пос. Лоо Лазаревского
внутригородского района г. Сочи"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Протяженность пляжей - 0,4 км	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	182900,0		-	-	31400,0	151500,0	-	
	федеральный бюджет	118170,0	-	-	-	-	118170,0	-	
	краевой бюджет	27330,6	-	-	-	-	27330,6	-	
	бюджет города Сочи	37399,4		-	-	31400,0	5999,4	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	182900,0		-	-	31400,0	151500,0	-	
	федеральный бюджет	118170,0	-	-	-	-	118170,0	-	
	краевой бюджет	27330,6	-	-	-	-	27330,6	-	
	бюджет города Сочи	37399,4		-	-	31400,0	5999,4	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	31400,0	-	-	-	31400,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	31400,0	-	-	-	31400,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	31400,0	-	-	-	31400,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	31400,0		-	-	31400,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 33
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Водоснабжение с. Ахштырь Адлерского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность площадочных сетей водоснабжения - 3500 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	всего <*>	предшествующий период	2021 год	2022 год	2022 год <*>	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	71860,8	197,5	71860,8	-	-	197,5	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	6866,5	-	6866,5	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	64994,3	197,5	64994,3	-	-	197,5	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	25891,5	197,5	25891,5	-	-	197,5	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	25891,5	197,5	25891,5	-	-	197,5	-	-	-	
	иные источники	-	-								
выполнение строительно-монтажных работ	всего	45969,3	-	45969,3	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	6866,5	-	6866,5	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	39102,8	-	39102,8	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	71860,8	197,5	71860,8	-	-	197,5	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	6866,5	-	6866,5	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	64994,3	197,5	64994,3	-	-	197,5	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	25891,5	197,5	25891,5	-	-	197,5	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	25891,5	197,5	25891,5	-	-	197,5	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	45969,3	-	45969,3	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	6866,5	-	6866,5	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	39102,8	-	39102,8	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующий период.

Приложение 34
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Газификация ул. Леси Украинки Хостинского района
города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность газопровода - 650 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	всего <*>	предшествующий период	2021 год	2022 год	2022 год <*>	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	4077,2	125,0	4077,2	-	-	125,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	4077,2	125,0	4077,2	-	-	125,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	4077,2	48,8	4077,2	-	-	48,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	4077,2	48,8	4077,2	-	-	48,8	-	-	-	
	иные источники	-	-								
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	76,2	-	-	-	76,2	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	76,2	-	-	-	76,2	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	4077,2	125,0	4077,2	-	-	125,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	4077,2	125,0	4077,2	-	-	125,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	4077,2	48,8	4077,2	-	-	48,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	4077,2	48,8	4077,2	-	-	48,8	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	76,2	-	-	-	76,2	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	76,2	-	-	-	76,2	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующий период.

Приложение 35
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Газоснабжение пос. Лоо Лазаревского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность трассы газопровода - 37724 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2024 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	всего <*>	предшествующий период	2021 год	2022 год	2022 год <*>	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	71531,1	70,8	26531,1	-	-	70,8	30000,0	15000,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	71531,1	70,8	26531,1	-	-	70,8	30000,0	15000,0	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	66305,4	-	21305,4	-	-	-	30000,0	15000,0	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	66305,4	-	21305,4	-	-	-	30000,0	15000,0	-	
	иные источники	-	-								
выполнение строительно-монтажных работ	всего	5225,7	70,8	5225,7	-	-	70,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	5225,7	70,8	5225,7	-	-	70,8	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	26531,1	70,8	26531,1	-	-	70,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	26531,1	70,8	26531,1	-	-	70,8	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	21305,4	-	21305,4	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	21305,4	-	21305,4	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	5225,7	70,8	5225,7	-	-	70,8	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	5225,7	70,8	5225,7	-	-	70,8	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующий период.

Приложение 36
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку
для многодетных семей в п. Аше Лазаревского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)
(корректировка сметной документации)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Мощность - 675 кВ	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2023 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	18763,2	1261,7	-	308,6	17192,9	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	14098,1	-	-	-	14098,1	-	-	
	бюджет города Сочи	4665,1	1261,7	-	308,6	3094,8	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1570,3	1261,7	-	308,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1570,3	1261,7	-	308,6	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	17192,9	-	-	-	17192,9	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	14098,1	-	-	-	14098,1	-	-	
	бюджет города Сочи	3094,8	-	-	-	3094,8	-	-	
	иные источники	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	1570,3	1261,7	-	308,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1570,3	1261,7	-	308,6	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1570,3	1261,7	-	308,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1570,3	1261,7	-	308,6	-	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 37
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Офис врача общей практики, расположенный
в п. Орел-Изумруд Адлерского района города Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая площадь объекта - 181,4 кв. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	всего <*>	предшествующий период	2021 год	2022 <*> год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	22332,6	261,6	1700,0	20632,6	261,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	22332,6	261,6	1700,0	20632,6	261,6	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-								
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1700,0	-	1700,0	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	1700,0	-	1700,0	-	-		-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	20632,6	261,6	-	20632,6	261,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-							
	краевой бюджет	20632,6	261,6		20632,6	261,6	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	22332,6	261,6	1700,0	20632,6	261,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	22332,6	261,6	1700,0	20632,6	261,6	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-								
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	1700,0	-	1700,0	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
	краевой бюджет	1700,0	-	1700,0			-			
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	20632,6	261,6	-	20632,6	261,6	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-							
	краевой бюджет	20632,6	261,6		20632,6	261,6				
	бюджет города Сочи	-	-		-	-		-	-	
	иные источники	-	-							

<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующий период.

Приложение 38
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Офис врача общей практики, расположенный
в ауле Хаджико Лазаревского района города Сочи"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая площадь объекта - 181,4 кв. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	всего <*>	предшествующий период	2021 год	2022 <*> год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	24931,2	1906,2	3364,6	21566,6	1906,2	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	23276,6	1906,2	1710,0	21566,6	1906,2	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1654,6	-	1654,6	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-								
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	3364,6	-	3364,6	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	1710,0	-	1710,0	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1654,6	-	1654,6	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-		-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	21566,6	1906,2	-	21566,6	1906,2	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-							
	краевой бюджет	21566,6	1906,2		21566,6	1906,2	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	24931,2	1906,2	3364,6	21566,6	1906,2	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	23276,6	1906,2	1710,0	21566,6	1906,2	-	-	-	
	бюджет города Сочи	1654,6	-	1654,6	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-								
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	3364,6	-	3364,6	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-		-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	1710,0	-	1710,0	-	-	-			
	бюджет города Сочи	1654,6	-	1654,6	-	-		-	-	
	иные источники	-	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	21566,6	1906,2	-	21566,6	1906,2	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-							
	краевой бюджет	21566,6	1906,2		21566,6	1906,2				
	бюджет города Сочи	-	-		-	-		-	-	
	иные источники	-	-							

<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующий период.

Приложение 39
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция и строительство объектов и сетей системы
водоснабжения Адлерского внутригородского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство,
реконструкция)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	протяженность сетей водоснабжения - 455600 м,
количество насосных станций и сооружений водоснабжения - 69 шт.	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2029 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	682756,3	-	-	-	96912,7	585843,6	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	682756,3	-	-	-	96912,7	585843,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	682756,3	-	-	-	96912,7	585843,6	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	682756,3	-	-	-	96912,7	585843,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-		-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-		-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	96912,7	-	-	-	96912,7	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	96912,7	-	-	-	96912,7	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	96912,7	-	-	-	96912,7	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	96912,7	-	-	-	96912,7	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 40
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция и строительство объектов и сетей системы
водоотведения Лазаревского внутригородского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство,
реконструкция)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	протяженность сетей водоотведения - 401974 м,
насосных станций и сооружений - 87 шт.	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2030 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	454400,0	-	-	-	49363,5	405036,5	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	454400,0	-	-	-	49363,5	405036,5	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	454400,0	-	-	-	49363,5	405036,5	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	454400,0	-	-	-	49363,5	405036,5	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-		-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-		-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	49363,5	-	-	-	49363,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	49363,5	-	-	-	49363,5	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	49363,5	-	-	-	49363,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	49363,5	-	-	-	49363,5	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 41
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция и строительство объектов и сетей системы
водоотведения Адлерского внутригородского района г. Сочи
(проектные и изыскательские работы, строительство,
реконструкция)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	протяженность сетей водоотведения - 382519 м, насосных станций и сооружений - 55 шт.	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2030 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	494867,5	-	-	-	33433,9	461433,6	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	494867,5	-	-	-	33433,9	461433,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	494867,5	-	-	-	33433,9	461433,6	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	494867,5	-	-	-	33433,9	461433,6	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-		-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-		-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-		-	-	
	иные источники	-							
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	33433,9	-	-	-	33433,9	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	33433,9	-	-	-	33433,9	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	33433,9	-	-	-	33433,9	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	33433,9	-	-	-	33433,9	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-		-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 42
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Газоснабжение п. Аше, п. Шхафит, п. Мамедова Щель,
ул. Новая п. Лазаревское Лазаревского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность газопровода - 21040 м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2022 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	всего <*>	предшествующий период	2021 год	2022 год	2022 год <*>	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	20802,4	70,0	20642,4	160,0	-	70,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	20802,4	70,0	20642,4	160,0	-	70,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	13193,8	-	13103,8	90,0	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	13193,8	-	13103,8	90,0	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-								
выполнение строительно-монтажных работ	всего	7608,6	70,0	7538,6	70,0	-	70,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	7608,6	70,0	7538,6	70,0	-	70,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	20802,4	70,0	20642,4	160,0	-	70,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	20802,4	70,0	20642,4	160,0	-	70,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-									
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	13193,8	-	13103,8	90,0	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	13193,8	-	13103,8	90,0	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	7608,6	70,0	7538,6	70,0	-	70,0	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	7608,6	70,0	7538,6	70,0	-	70,0	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<*> - финансирование мероприятий, не исполненное в предшествующий период.

Приложение 43
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

Исключено. - Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 04.10.2022 N 3334.

Приложение 44
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2022 N 2437)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция пешеходного моста через реку Псахе,
по ул. Анапская - Крымская, Центрального района, г. Сочи
(включая проектно-изыскательские работы)"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Общая протяженность объекта - 35,3 п. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2023 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	предшествующий период	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	30877,7	-	-	30877,7	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	30877,7	-	-	30877,7	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	30877,7	-	-	30877,7	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	30877,7	-	-	30877,7	-	-	-	
	иные источники	-							
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	30877,7	-	-	30877,7	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	30877,7	-	-	30877,7	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-							
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	30877,7	-	-	30877,7	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	30877,7	-		30877,7	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	-	-	-	-	-	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
	бюджет города Сочи	-	-	-	-	-	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 45
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ПАСПОРТ
подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов
водоотведения на территории города Сочи"

Координатор подпрограммы	департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Участники подпрограммы	не предусмотрены	
Цель подпрограммы	минимизации негативных последствий сброса сточных вод в акваторию Черного моря, обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения	
Задача подпрограммы	строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
Перечень целевых показателей подпрограммы	количество разрабатываемых комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий
количество разработанной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы
количество строящихся и реконструируемых объектов водоотведения
количество строящихся и реконструируемых канализационных напорных коллекторов
количество построенных и реконструированных объектов водоотведения
количество построенных и реконструированных канализационных напорных коллекторов	
Проекты и (или) программы	не предусмотрены	
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2025 годы, этапы не предусмотрены	
Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей	всего	в разрезе источников финансирования	
Годы реализации		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники	
2022 год	1342635,5	-	1335922,0	6713,5	-	
2023 год	16306780,8	-	16225246,6	81534,2	-	
2024 год	9260694,9	-	9214391,2	46303,7	-	
2025 год	8040136,4	-	7999935,4	40201,0	-	
Всего	34950247,6	-	34775495,2	174752,4	-	
Расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	
2022 год	1342635,5	-	1335922,0	6713,5	-	
2023 год	16306780,8	-	16225246,6	81534,2	-	
2024 год	9260694,9	-	9214391,2	46303,7	-	
2025 год	8040136,4	-	7999935,4	40201,0	-	
Всего	34950247,6	-	34775495,2	174752,4	-	

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор - департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, который:
обеспечивает разработку, реализацию, координацию деятельности участников подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;
организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;
осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы в целом;
осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).
Участники подпрограммы в пределах своей компетенции:
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы;
ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным годом представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик мероприятия:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Директор департамента строительства
администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
А.А.ЕВСЮКОВ

Приложение
к подпрограмме
"Строительство и реконструкция
объектов водоотведения
города Сочи"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СОЧИ"

N п/п	Наименование мероприятия	Статус <1>	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей	Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель	
				всего	в разрезе источников финансирования			
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Цель 1. Минимизации негативных последствий сброса сточных вод в акваторию Черного моря, обеспечение экологически благоприятных условий жизни населения	
1.1.	Задача 1.1. Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, иные мероприятия по водоотведению на территории города Сочи		2022	1342635,5	-	1335922,0	6713,5	-			
			2023	16306780,8	-	16225246,6	81534,2	-			
			2024	9260694,9	-	9214391,2	46303,7	-			
			2025	8040136,4	-	7999935,4	40201,0	-			
			всего	34950247,6	-	34775495,2	174752,4	-			
		Строка "2025" п. 1.1.1.1 вступает в силу после официального опубликования
решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края "О бюджете города Сочи на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внесения соответствующих
изменений в бюджетную роспись муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края.		
	
1.1.1.1	Реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер" и Ликвидация очистных сооружений канализации "Кудепста"	1	2022	433249,1	-	431082,8	2166,3	-	Проектно-изыскательские работы - 51,5%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	4998233,0	-	4973241,8	24991,2	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение). Строительная готовность - 46,6%		
			2024	2856307,0	-	2842025,4	14281,6	-	Строительная готовность - 75,5%		
			2025	2463062,6	-	2450747,2	12315,4	-	Строительная готовность - 100%		
			всего	10750851,7	-	10697097,2	53754,5	-			
		Строка "2025" п. 1.1.1.2 вступает в силу после официального опубликования
решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края "О бюджете города Сочи на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внесения соответствующих
изменений в бюджетную роспись муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края.		
	
1.1.1.2	Реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс"	1	2022	98100,9	-	97610,3	490,6	-	Проектно-изыскательские работы - 51,5%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	1439408,2	-	1432211,1	7197,1	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение). Строительная готовность - 46,6%		
			2024	800693,1	-	796689,6	4003,5	-	Строительная готовность - 75,5%		
			2025	710965,1	-	707410,2	3554,9	-	Строительная готовность - 100%		
			всего	3049167,3	-	3033921,2	15246,1	-			
		Строка "2025" п. 1.1.1.3 вступает в силу после официального опубликования
решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края "О бюджете города Сочи на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внесения соответствующих
изменений в бюджетную роспись муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края.		
	
1.1.1.3	Реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское"	1	2022	176506,2	-	175623,6	882,6	-	Проектно-изыскательские работы - 51,5%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	2365321,6	-	2353494,9	11826,7	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение). Строительная готовность - 47,1%		
			2024	1328298,4	-	1321656,9	6641,5	-	Строительная готовность - 75,5%		
			2025	1167357,1	-	1161520,3	5836,8	-	Строительная готовность - 100%		
			всего	5037483,3	-	5012295,7	25187,6	-			
		Строка "2025" п. 1.1.1.4 вступает в силу после официального опубликования
решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края "О бюджете города Сочи на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внесения соответствующих
изменений в бюджетную роспись муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края.		
	
1.1.1.4	Реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан"	1	2022	84860,4	-	84436,0	424,4	-	Проектно-изыскательские работы - 51,5%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	1071001,0	-	1065645,9	5355,1	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение). Строительная готовность - 47,1%		
			2024	605496,1	-	602468,6	3027,5	-	Строительная готовность - 75,5%		
			2025	528266,6	-	525625,2	2641,4	-	Строительная готовность - 100%		
			всего	2289624,1	-	2278175,7	11448,4	-			
		Строка "2025" п. 1.1.1.5 вступает в силу после официального опубликования
решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края "О бюджете города Сочи на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внесения соответствующих
изменений в бюджетную роспись муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края.		
	
1.1.1.5	Строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель"	1	2022	126135,9	-	125505,2	630,7	-	Проектно-изыскательские работы - 51,5%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	1519175,5	-	1511579,6	7595,9	-	Проектно-изыскательские работы - 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение). Строительная готовность - 46,7%		
			2024	863603,0	-	859284,9	4318,1	-	Строительная готовность - 75,6%		
			2025	748971,4	-	745226,5	3744,9	-	Строительная готовность - 100%		
			всего	3257885,8	-	3241596,2	16289,6	-			
		Строки "2022", "2023", "2024" п. 1.1.1.6 вступают в силу после официального
опубликования решения Городского Собрания Сочи муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "О внесении изменений
в решение Городского Собрания Сочи муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 23 декабря 2021 года N 145
"О бюджете города Сочи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
Строка "2025" п. 1.1.1.6 вступает в силу после официального опубликования
решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края "О бюджете города Сочи на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внесения соответствующих изменений
в бюджетную роспись муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края.		
	
1.1.1.6	Реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу" и строительство объекта системы централизованного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи "Бочаров ручей"	1	2022	423783,0	-	421664,1	2118,9	-	Проектно-изыскательские работы - 51,5%	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" - муниципальный заказчик, департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств	
			2023	4913641,5	-	4889073,3	24568,2	-	Проектно-изыскательские работы 100%. Положительное заключение государственной экспертизы (1 заключение). Строительная готовность - 46,7%		
			2024	2806297,3	-	2792265,8	14031,5	-	Строительная готовность - 75,6%		
			2025	2421513,6	-	2409406,0	12107,6	-	Строительная готовность - 100%		
			всего	10565235,4	-	10512409,2	52826,2	-			
	Итого:		2022	1342635,5	-	1335922,0	6713,5	-			
			2023	16306780,8	-	16225246,6	81534,2	-			
			2024	9260694,9	-	9214391,2	46303,7	-			
			2025	8040136,4	-	7999935,4	40201,0	-			
			всего	34950247,6	-	34775495,2	174752,4	-			

--------------------------------
<1> Статус "1" - мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения.
<1> Статус "2" - мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606 целевых показателей.
<1> Статус "3" - мероприятие является мероприятием федеральных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов.

Приложение 46
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер"
и ликвидация очистных сооружений канализации "Кудепста"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Увеличение производительности до 150 тыс. м куб./сут.
Модернизация глубоководного выпуска 3660 п. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	6	7	7	8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	10750851,7	433249,1	4998233,0	2856307,0	2463062,5	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7855071,7	431082,8	4973241,8	2842025,4	2450747,1	
	бюджет города Сочи	53754,5	2166,3	24991,2	14281,6	12315,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	840716,6	433249,1	407467,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	836513,0	431082,8	405430,2	-	-	
	бюджет города Сочи	4203,6	2166,3	2037,3	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	9910135,0	-	4590765,5	2856307,0	2463062,5	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	9860584,1		4567811,6	2842025,4	2450747,1	
	бюджет города Сочи	49550,9	-	22953,9	14281,6	12315,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	7894544,7	433249,1	4998233,0		2463062,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	10697097,2	431082,8	4973241,8	2842025,4	2450747,2	
	бюджет города Сочи	53754,5	2166,3	24991,2	14281,6	12315,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:		-			-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	840716,6	433249,1	407467,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	836513,0	431082,8	405430,2	-	-	
	бюджет города Сочи	4203,6	2166,3	2037,3	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	9910135,1	-	4590765,5	2856307,0	2463062,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	9860584,2	-	4567811,6	2842025,4	2450747,2	
	бюджет города Сочи	49550,9	-	22953,9	14281,6	12315,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	

Приложение 47
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Модернизация глубоководного выпуска 2135 п. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	6	7	7	8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	3049167,3	98100,9	1439408,2	800693,1	710964,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2237231,4	97610,3	1432211,1	796689,6	707410,0	
	бюджет города Сочи	15246,1	490,6	7197,1	4003,5	3554,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	189048,4	98100,9	90947,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	188103,1	97610,3	90492,8	-	-	
	бюджет города Сочи	945,3	490,6	454,7	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	2860118,7	-	1348460,7	800693,1	710964,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2845817,9		1341718,3	796689,6	707410,0	
	бюджет города Сочи	14300,8	-	6742,4	4003,5	3554,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	2248474,2	98100,9	1439408,2		710965,1	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	3033921,2	97610,3	1432211,1	796689,6	707410,2	
	бюджет города Сочи	15246,1	490,6	7197,1	4003,5	3554,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:		-			-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	189048,4	98100,9	90947,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	188103,1	97610,3	90492,8	-	-	
	бюджет города Сочи	945,3	490,6	454,7	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	2860118,9	-	1348460,7	800693,1	710965,1	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2845818,1	-	1341718,3	796689,6	707410,2	
	бюджет города Сочи	14300,8	-	6742,4	4003,5	3554,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	

Приложение 48
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Увеличение производительности до 30 тыс. м куб./сут.
Модернизация глубоководного выпуска 2338 п. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	6	7	7	8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	5037483,3	176506,2	2365321,6	1328298,4	1167356,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	3690638,5	175623,6	2353494,9	1321656,9	1161520,0	
	бюджет города Сочи	25187,7	882,6	11826,7	6641,5	5836,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	342548,9	176506,2	166042,7	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	340836,1	175623,6	165212,5	-	-	
	бюджет города Сочи	1712,8	882,6	830,2	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	4694934,2	-	2199278,9	1328298,4	1167356,9	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	4671459,3		2188282,4	1321656,9	1161520,0	
	бюджет города Сочи	23474,9	-	10996,5	6641,5	5836,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	5037483,3	176506,2	2365321,6	1328298,4	1167357,1	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	5012295,7	175623,6	2353494,9	1321656,9	1161520,3	
	бюджет города Сочи	25187,6	882,6	11826,7	6641,5	5836,8	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:		-			-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	342548,9	176506,2	166042,7	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	340836,1	175623,6	165212,5	-	-	
	бюджет города Сочи	1712,8	882,6	830,2	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	4694934,4	-	2199278,9	1328298,4	1167357,1	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	4671459,6	-	2188282,4	1321656,9	1161520,3	
	бюджет города Сочи	23474,8	-	10996,5	6641,5	5836,8	
	иные источники	-	-	-	-	-	

Приложение 49
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Увеличение производительности до 5 тыс. м куб./сут.
Модернизация глубоководного выпуска 2450 п. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	6	7	7	8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	2289624,1	84860,4	1071001,0	605496,1	528266,4	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	1675706,9	84436,0	1065645,9	602468,6	525625,0	
	бюджет города Сочи	11448,4	424,4	5355,1	3027,5	2641,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	164852,9	84860,4	79992,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	164028,5	84436,0	79592,5	-	-	
	бюджет города Сочи	824,4	424,4	400,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	2124771,0	-	991008,5	605496,1	528266,4	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2114147,0		986053,4	602468,6	525625,0	
	бюджет города Сочи	10624,0	-	4955,1	3027,5	2641,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	2289624,1	84860,4	1071001,0	605496,1	528266,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2278175,7	84436,0	1065645,9	602468,6	525625,2	
	бюджет города Сочи	11448,4	424,4	5355,1	3027,5	2641,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:		-			-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	164852,9	84860,4	79992,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	164028,5	84436,0	79592,5	-	-	
	бюджет города Сочи	824,4	424,4	400,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	2124771,2	-	991008,5	605496,1	528266,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2114147,2	-	986053,4	602468,6	525625,2	
	бюджет города Сочи	10624,0	-	4955,1	3027,5	2641,4	
	иные источники	-	-	-	-	-	

Приложение 50
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Строительство очистных сооружений канализации
"Якорная Щель"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Увеличение производительности до 5 тыс. м куб./сут.
Модернизация глубоководного выпуска 2200 п. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	6	7	7	8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	3257885,8	126135,9	1519175,5	863603,0	748971,2	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2382311,1	125505,2	1511579,6	859284,9	745226,3	
	бюджет города Сочи	16289,6	630,7	7595,9	4318,1	3744,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	244341,4	126135,9	118205,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	243119,7	125505,2	117614,5	-	-	
	бюджет города Сочи	1221,7	630,7	591,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	3013544,2	-	1400970,0	863603,0	748971,2	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2998476,3		1393965,1	859284,9	745226,3	
	бюджет города Сочи	15067,9	-	7004,9	4318,1	3744,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	3257885,8	126135,9	1519175,5	863603,0	748971,4	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	3241596,2	125505,2	1511579,6	859284,9	745226,5	
	бюджет города Сочи	16289,6	630,7	7595,9	4318,1	3744,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:		-			-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	244341,4	126135,9	118205,5	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	243119,7	125505,2	117614,5	-	-	
	бюджет города Сочи	1221,7	630,7	591,0	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	3013544,4	-	1400970,0	863603,0	748971,4	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	2998476,5	-	1393965,1	859284,9	745226,5	
	бюджет города Сочи	15067,9	-	7004,9	4318,1	3744,9	
	иные источники	-	-	-	-	-	

Приложение 51
к муниципальной программе
муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СОЧИ

		Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21.10.2022 N 3576)		

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
Реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу"
и строительство объекта системы централизованного
водоотведения Центрального внутригородского района
города Сочи "Бочаров ручей"

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения	Строительство	
2. Наименование муниципального заказчика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
3. Наименование застройщика	Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства"	
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Увеличение производительности до 150 тыс. м куб./сут.
Модернизация глубоководного выпуска 3660 п. м	
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2025 г.	
Объем финансового обеспечения	
Показатель	Источник финансирования, тыс. рублей	Период реализации	
		всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	6	7	7	8	
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	10565235,4	423783,0	4913641,5	2806297,3	2421513,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	7720143,4	421664,1	4889073,3	2792265,8	2409406,0	
	бюджет города Сочи	52826,2	2118,9	24568,2	14031,5	12107,6	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:							
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	822081,0	423783,0	398298,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	817970,6	421664,1	396306,5	-	-	
	бюджет города Сочи	4110,4	2118,9	1991,5	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	9743154,4	-	4515343,5	2806297,3	2421513,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	9694438,6		4492766,8	2792265,8	2409406,0	
	бюджет города Сочи	48715,8	-	22576,7	14031,5	12107,6	
	иные источники	-	-	-	-	-	
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	всего	7758938,1	423783,0	4913641,5		2421513,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	10512409,2	421664,1	4889073,3	2792265,8	2409406,0	
	бюджет города Сочи	52826,2	2118,9	24568,2	14031,5	12107,6	
	иные источники	-	-	-	-	-	
в том числе:		-			-	-	
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	822081,0	423783,0	398298,0	-	-	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	817970,6	421664,1	396306,5	-	-	
	бюджет города Сочи	4110,4	2118,9	1991,5	-	-	
	иные источники	-	-	-	-	-	
выполнение строительно-монтажных работ	всего	9743154,4	-	4515343,5	2806297,3	2421513,6	
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
	краевой бюджет	9694438,6	-	4492766,8	2792265,8	2409406,0	
	бюджет города Сочи	48715,8	-	22576,7	14031,5	12107,6	
	иные источники	-	-	-	-	-	

Приложение 25
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА СОЧИ

Исключено с 1 января 2022 года. - Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.12.2021 N 3273.

Приложение 26
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА СОЧИ

Исключено с 1 января 2022 года. - Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.12.2021 N 3273.

Приложение 27
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
"Развитие инфраструктуры города Сочи"

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА СОЧИ

Исключено с 1 января 2022 года. - Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.12.2021 N 3273.